시민이 행복한 맞춤도시 안성

2013년도 주요사업 현황

안     성     시

◈ 목        차 ◈

1. 2013년도 예산현황	6

2. 2013년도 주요사업 현황

○ 보훈복지회관 건립	7

○ 안성시 장애인 복지관 건립	8

○ 미양 고지리 공동묘지 공원화 사업	9

○ 복합교육문화센터 건립	10

○ 야외수영장 부지 조성사업	11

○ 학교운동장 인조잔디구장 조성사업(양진초교)	12

○ 안성체육시설(축구장,야구장) 조성사업	13

○ 금석천 생태하천 복원사업	14

○ 한강수계 생태하천 복원사업	15

○ 제2폐수종말처리장 고도처리시설 설치사업	16

○ 비점오염 저감시설(생태습지) 설치사업	17

○ 주요도로변 녹지조성사업	18

○ 읍면별 테마가로수길 조성	19

○ 숲가꾸기 사업	20

○ 서운산 자연휴양림 조성사업	21

○ 원곡물류단지 진입도로 개설공사	22

○ 대덕 내리도로 개설공사	23

○ 미양 양지도로 개설공사	24

○ 공도 진사도로 개설공사	25

○ 안성 금산도로 개설공사	26

○ 안성 봉산도로 개설공사	27

○ 일죽 송천 도시계획도로 개설공사	28

○ 공도 마정도로 개설공사	29

○ 죽산 구교동도로 개설공사	30

○ 안성 도기도로 개설공사	31

○ 공도 용두도로 개설공사	32

○ 서운 신촌도로 개설공사	33

○ 안성 가현도로 개설공사	34

○ 안성 옥산도로 개설공사	35

○ 안성 명륜도로 개설공사	36

○ 미양 양지도로 개설공사	37

○ 공도 승두도로 개설공사	38

○ 일죽면 소재지 종합정비사업	39

○ 죽산면 소재지 종합정비사업	40

○ 안성맞춤대로 지중화 사업	41

○ 고삼면 소재지 정비사업	42

○ 방신-문기 간 도로확포장 공사	43

○ 삼흥-옥정 간 도로확포장 공사	44

○ 모산-소현 간 도로확포장 공사	45

○ 원곡-성은 간 도로확포장 공사	46

○ 장능-장계 간 도로확포장 공사	47

○ 종합운동장-금광호수 간 도로확포장 공사	48

○ 계동-중리동 간 도로확포장 공사	49

○ 승두-신두 간 도로확포장 공사	50

○ 농촌생활환경 정비사업	51

○ 기계화 경작로 확포장 사업	52

○ 농촌마을 종합개발사업(용설권역)	53

○ 농촌마을 종합개발사업(미리내권역)	54

○ 봄마무리 대구획경지정리 사업	55

○ 수리시설 정비사업	56

○ 공도버스정류장 및 환승주차장 건립	57

○ 반석아파트 앞 교차로 체계 개선	58

○ 안성천 수해상습지 개선사업	59

○ 당목천 수해상습지 개선사업	60

○ 통복천 수해상습지 개선사업	61

○ 월동천(자연형) 개수사업	62

○ 죽림소하천 정비사업	63

○ 호동소하천 정비사업	64

○ 북보소하천 정비사업	65

○ 사곡소하천 정비사업	66

○ 금노소하천 정비사업	67

○ 방삼소하천 정비사업	68

○ 공도용두 자연재해위험지구 정비사업	69

○ 농기계 임대사업	70

○ 환경친화적 청정산업	71

○ 급수취약시설 수도시설 확충사업	72

○ 노후관 교체 공사	73

○ 농촌지방상수도 개발사업	74

○ 안성시 하수도시설 민간투자사업(BTO)	75

○ 안성시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	76

○ 일죽․죽산 하수관거 정비사업	77

○ 불당공공하수 처리시설 증설 사업	78

○ 동지역 노후관거 개량사업	79

○ 명륜연립-동인병원 간 하수관 개량사업	80

○ 공도 진사리 공공도서관 조성	81

2013년도 예산현황

총 5,539억원

○ 일반회계  --------------------------------------------- 4,308억원

○ 특별회계  ------------------------------------------------- 1,231억원

※ 기금 450억원(총 5,989억원)

일 반 회 계

(단위 :억원)

≪ 세 입 ≫

≪ 세 출 ≫

○ 자체수입 -------- 1,660(38.5%) - 지 방 세 ----- 1,285 - 세 외 수 입 ------- 375 ○ 의존수입 --------- 2,648(61.5%) - 지방교부세 ------- 894 - 재정보전금 ------- 313 - 보 조 금 ----- 1,441 (국비 1,004, 도비 437) ※시비부담액 : 719억원 (16.7%)		○ 일반공공행정 ----- 305(7.1%) ○ 공공질서 및 안전 ---- 77(1.8%) ○ 교 육 ------------ 170(4.0%) ○ 문화 및 관광 ------- 282(6.5%) ○ 환경보호 ---------- 250(5.8%) ○ 사회복지 --------- 1,174(27.2%) ○ 보 건 -------------- 80(1.9%) ○ 농림해양수산 ------ 568(13.2%) ○ 산업․중소기업 -------- 26(0.6%) ○ 수송 및 교통 ------- 274(6.4%) ○ 국토 및 지역개발 --- 462(10.7%) ○ 예비비 -------------- 58(1.3%) ○ 기 타 --------------- 582(13.5%)

특 별 회 계

(단위 :억원)

계	기 타 특 별 회 계(101)									공기업특별회계(1,130)
	새마을 소 득	공 유 재 산	의 료 보 호	수 질 개 선	산 업 단 지	장 기 미집행	기 반 시 설	도 시 개 발	주차장	상수도	하수도	공 영 개 발
1,231	3	11	14	23	11	8	6	16	9	243	641	246

※ 기타특별회계 : 9개 사업, 공기업특별회계 : 3개 사업, 기금 : 14개 사업

보훈복지회관 건립

사 업 개 요

위    치 : 안성시 현수동 일원(복합교육문화센터 내)

사업기간 : 2013. 1월 ～ 2014. 10월

사업규모 : 2,825백만원 (건축면적 : 1,321㎡ 지상 4층, 지하 1층)

사업내용 : 사무실, 다목적실, 회의실, 체력 단련실 등

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	2,825	0	2,825	0
국 비	500		500
교부세	0
도 비	0
시 비	2,325		2,325	0
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년10월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년10월

사업비 산출내역 : 2,825백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------- 2,663백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------  118백만원

- 감리비․시설부대비  ----------------------------------------------------------------------  44백만원

기대효과

올바른 국가관 확립과 나라사항 마음 함양의 토대 마련 및 보훈문화 확산

나라를 위해 헌신한 국가유공자들의 명예와 자긍심 고취

시대에 걸 맞는 보훈복지 서비스지원의 질적 수준 향상

안성시장애인복지관 건립

사 업 개 요

위    치 : 안성시 현수동 일원

사업기간 : 2013. 1 ~ 2014. 12

사업규모 : 1,653㎡(지하1층, 지상4층)

사업내용 : 장애인복지관 건립

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	4,900		1,000	2,600
국 비	500		500
교부세	0
도 비	350		350
시 비	4,050	1,300	150	2,600
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 도시계획시설결정 및 실시설계  ------------------------------------- 2013년 12월~2013년 8월

- 토지보상  -------------------------------------------------------------------- 2013년 8월~2014년 2월      - 공사계약 및 준공  ------------------------------------------------------ 2014년 1월~2014년 12월

- 장애인복지관 조례제정 ------------------------------------------------------------------ 2014년 1월

- 위탁운영자 공모 및 선정 ------------------------------------------------------------- 2014년 12월

사업비 산출내역 : 4,900백만원

- 토지보상비 ---------------------------------------------------------------------------------- 1,300백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  3,200백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------  150백만원

- 감리비․시설부대비  ---------------------------------------------------------------------  250백만원

기대효과

장애인의 복지증진을 위해 종합적인 재활서비스 제공 가능

미양 고지리 공동묘지 공원화사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 미양면 고리지 산41번지

사업기간 : 2011. 1 ~ 2016.12

사업규모 : 묘지조성 A = 19,343㎡

사업내용 : 자연장지, 봉안담, 녹지, 광장, 진입도로 등 설치

- 자연장지(A=4,028㎡, 4,000기), 봉안담(A=3,642㎡, 14,000구)

- 녹지(A=5,190㎡), 광장(A=690㎡), 진입도로(L=400m, B=10m)

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	8,974		2,624	6,350
국 비	2,958		1,837	1,121
교부세	0
도 비	634		393	241
시 비	5,382		394	4,988
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 도시계획시설결정 및 실시설계용역 발주  ----------------------------------------- 2013년 2월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 7월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년12월

사업비 산출내역 : 8,974백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  8,330백만원

- 설계용역비(도시계획시설결정비포함)  ----------------------------------------------  544백만원

- 감리비․시설부대비  ---------------------------------------------------------------------  100백만원

기대효과

불법 장사시설로 인한 국토의 훼손을 방지하고 선진장례문화기반 구축

기존의 공동묘지를 재개발 정비 공원화함으로써 주민의 인식전환의 계기마련

복합교육문화센터 건립

사 업 개 요

위    치 : 안성시 현수동 80번지 일원

사업기간 : 2010~2016.6월

사업규모 : 14,232㎡(대공연장 1,000석, 소공연장 300석, 야외공연장 400석)

사업내용 :

- 대공연장 1,000석, 소공연장 300석, 야외공연장 400석

- 전시실, 교육 및 체육시설, 등

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	52,200	400	10,500	41,300
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	52,200	400	10,500	41,300
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 설계공모  ------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월~3월

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월~9월

- 공사착공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 11월

- 공사준공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2016년 06월

사업비 산출내역 : 52,200백만원

- 보상비  ------------------------------------------------------------------------------------- 8,000백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------- 39,300백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------- 1,900백만원

- 감리비․도시관리계획결정․시설부대비  ------------------------------------------ 3,000백만원

기대효과

문화예술, 공연, 교육 및 체육시설 등의 기반시설확충으로 주민편익증대

야외수영장 부지 조성사업

사 업 개 요

위    치 : 보개면 복평리 산28-2번지 일원(안성맞춤랜드 내)

사업기간 : 2012.06.~2013.06.

사업규모 : 5,800㎡

사업내용 : 야외수영장 부지 조성 1식

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	660	60	600	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	660	60	600
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 6월

사업비 산출내역 : 660백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------- 600백만원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------------ 60백만원

- 감리비․시설부대비  -------------------------------------------------------------------------  백만원

기대효과

사계절 썰매장과 함께 가족단위 레포츠 시설 조성으로 여가선용 기회     확대 제공

안성맞춤랜드 및 지역경제 활성화 도모

학교운동장 인조잔디구장 조성사업(양성초교)

사 업 개 요

위    치 : 양성면 동항리 420번지 양성초등학교

사업기간 : 2013.02.~2013.12.

사업규모 : 인조잔디구장 조성 1식

사업내용 :

- 인조잔디구장 3,995㎡(85m×47m), 트랙(직선 100m×4레인, 곡선 2레인)

- 다목적 구장 714㎡, 야간조명시설 등

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	650	0	650	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	650		650
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보조금교부  --------------------------------------------------------------------------------- 2013년 3월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 7월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 :  650백만원

- 공사비  ---------------------------------------------------------------------------------------  630백만원

- 설계용역비  -----------------------------------------------------------------------------------  20백만원

기대효과

공공체육시설 소외지역의 학교운동장 인조잔디구장 조성을 통하여       인프라 확충 및 생활체육 활성화 도모

안성 체육시설(축구장, 야구장) 조성사업

사 업 개 요

위    치 : 보개면 양복리 216-9번지 일원

사업기간 : 2009 ~ 2013

사업규모 : 30,658㎡ (보조구장 제외)

사업내용 : 축구장 1면, 야구장 1면, 부대시설 등

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	9,860	6,580	3,280	0
국 비	894		894
교부세	480	480
도 비	626		626
시 비	7,860	6100	1760
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보상완료  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 8월

사업비 산출내역 : 9,860백만원

- 보상비  --------------------------------------------------------------------------------------- 5,100백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------- 4,760백만원

기대효과

생활체육시설로써 부족한 종합운동장의 기능 보완

시민의 체육활동에 부흥하기 위한 체육시설 조성

금석천 생태하천 복원사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 당왕동 일원【비룡초교(금석2교) ~ 개내교(읍내교)】

사업기간 : 2010. 7. ~ 2013. 05

사업규모 : 하천연장 0.9km

사업내용 : 도심형 생태하천 복원 및 친수공간 조성

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	9,928	4,051	5,877
국 비	6,833	2,240	4,593
교부세
도 비	1,464	480	984
시 비	1,631	1,331	300

세부 사업계획

추 진 일 정

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년 5월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 5월

사업비 산출내역 : 9,928,000천원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------    9,628,000천원

- 설계용역비  -------------------------------------------------------------------------------  300,000천원

기대효과

하천의 직강화, 콘크리트 호안 조성 등 이.취수 위주의 하천정비로 인해 훼      손된 하천환경을 자연상태에 가깝게 복원함으로써 하천의 수질을 개선      함은 물론 수생태계의 건강성을 회복

한강수계유역 생태하천 복원사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 일죽면【청미, 화곡, 화봉, 신흥천】, 죽산면【죽산천】

사업기간 : 2009. 1. ~ 2015. 12

사업규모 : 하천연장 17.7km

사업내용 : 자연형 생태하천 복원

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	12,000	945	900	10,155
국 비	8,400	661	630	7,109
한강수계기금	2,520	198	189	2,133
도 비	540	43	40.5	456.5
시 비	540	43	40.5	456.5

세부 사업계획

추 진 일 정

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 8월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년12월

사업비 산출내역 : 12,000,000천원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------    10,700,000천원

- 설계용역비  -----------------------------------------------------------------------------  1,300,000천원

기대효과

하천의 직강화, 콘크리트 호안 조성 등 이.취수 위주의 하천정비로 인해 훼      손된 하천환경을 자연상태에 가깝게 복원함으로써 하천의 수질을 개선      함은 물론 수생태계의 건강성을 회복

제2폐수종말처리장 고도처리시설 설치사업

사 업 개 요

위    치 : 미양면 제2공단 5길 58번지

사업기간 : 2011. 04월 ~ 2014. 07월

사업규모 : 고도처리시설 11,000㎥/일

사업내용 : 방류수 수질기준 강화에 따른 총질소 및 총인 고도처리사업

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	13,173	1,750	4,720	6,703
국 비	6,586.5	685	2,360	3,541.5
교부세	0
도 비	0
시 비	6,586.5	1,065	2,360	3,161.5
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 순 산소조 토목공사  --------------------------------------------------------------------- 2013년 9월

- 기계설비, 전기계장 공사  ------------------------------------------- 2013년 10월~ 2014년 4월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 7월

사업비 산출내역 : 13,173백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------  12,060백만원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------------ 78백만원

- 감리비․시설부대비  -------------------------------------------------------------------  1,035백만원

기대효과

2013년 강화되는 폐수종말처리장 방류수 수질기준 준수

방류수 수질기준을 준수하여 깨끗한 하천조성

비점오염 저감시설(생태습지) 설치사업

사 업 개 요

위    치 : 죽산면 용설리, 월정리 일원

사업기간 : 2013. 01월 ~ 2014. 12월

사업규모 : 용설천 생태습지 1개소, 죽림천 생태습지 1개소

사업내용 : 축산시설 및 도로에서 발생하는 오염물질 저감사업

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	5,200	0	2,000	3,200
국 비	2,600	0	1,000	1,600
교부세	0
도 비	650		250	400
시 비	650	0	250	400
기타(기금)	1,300		500	800

세부 사업계획

추 진 일 정

- 기본 및 실시설계  ------------------------------------------------------------------------ 2013년 9월

- 토지보상  -----------------------------------------------------------------  2013년 10월~2014년 4월

- 공사준공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2014년 12월

사업비 산출내역 : 5,200백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  4,400백만원

- 설계용역비  ----------------------------------------------------------------------------------- 300백만원

- 감리비․시설부대비 ------------------------------------------------------------------------ 500백만원

기대효과

한강수계 수질오염총량제 시행에 따른 개발할당량 확보

비점오염원에 의한 하천오염을 미연에 방지하여 깨끗한 환경 조성

주요도로변 녹지조성사업

사 업 개 요

위    치 : 관내 주요도로변

사업기간 : 2013. 01 ~ 2013. 06

사업규모 :가로수식재 및 띠녹지조성

사업내용 :

- 띠녹지조성 5km (남안성IC~동광아파트 삼거리 2㎞, 종합터미널 ~

봉산로타리 1㎞, 중앙대 입구 ~ 한경대 2㎞)

- 국도 38호선 가로수 식재 5km

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,100	0	1,100	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	1,100		1,100
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 6월

사업비 산출내역 : 1,100백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  1,090백만원

- 설계용역비  -----------------------------------------------------------------------------------  10백만원

기대효과

도심지 내 가로환경을 개선하여 아름답고 쾌적한 도시환경을 조성 도시가치 향상 및 시민 삶의 질 향상

읍․면별 테마가로수 길 조성

사 업 개 요

위    치 : 읍․면별  주요도로변

사업기간 : 2013. 01 ~ 2013. 06

사업규모 : 가로수식재 10.5km

사업내용 : 테마가로수길조성 10.5km

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	725	0	725	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	725		725
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 6월

사업비 산출내역 : 725백만원

- 공사비  ---------------------------------------------------------------------------------------  725백만원

기대효과

읍면별 주요도로에 테마가 있는 가로수를 식재하여 괘적하고 아름다운 가로환경을 조성 녹지공간을 확충 시민의 편익을 증진하고 녹색도시로서의 이미지제고

숲가꾸기사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 관내 산림일원

사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 12.

사업규모 : 800ha/11명

사업내용 :

- 정책숲가꾸기사업 600ha, 조림지가꾸기사업 150ha, 어린나무가꾸기사업 50ha

- 바이오매스수집단 및 산림조사단 11명

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,132		1,132
국 비	638		638
교부세	0
도 비	148		148
시 비	346		346
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공 및 준공 -------------------------------------------------------------- 2013년 03월 ~ 12월

사업비 산출내역 : 1,132백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------1,042백만원

- 설계용역비  -------------------------------------------------------------------------------------55백만원

- 감리비․시설부대비  -------------------------------------------------------------------------35백만원

기대효과

산림을 경제, 환경적으로 가치있는 국가자원으로 육성

경제림 육성단지에 숲가꾸기를 집중하여 산림가치 제고

서운산 자연휴양림 조성사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 금광면 상중리 산19번지 일원

사업기간 : 2010. 09 ~ 2015. 12.

사업규모 : 89.9ha / 휴양림 조성 1식

사업내용 :

- 토지매입 25ha

- 도로 및 주차장 조성공사

- 문화재발굴조사

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	10,464	835	3,200	6,429
국 비	2,500	0	100	2,400
교부세	0
도 비	1,250	0	50	1,200
시 비	6,714	835	3,050	2,829
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 토지매입  --------------------------------------------------------------------------- 2013년 01월~06월

- 공사착공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 07월

- 공사준공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 12월

사업비 산출내역 : 10,464백만원

- 토지매입비  --------------------------------------------------------------------------------- 2,479백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------- 7,110백만원

- 시설부대비  ------------------------------------------------------------------------------------ 40백만원

- 용역비 ------------------------------------------------------------------------------------------ 835백만원

기대효과

휴양림 진입도로 및 주차장을 1차로 조성하여 서운산, 석남사를 찾는 내방객에게 편의 제공

원곡물류단지 진입도로(중로1-8호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 원곡면 칠곡리 758-1번지 일원

사업기간 : 2011. 02. ～ 2013. 06. 30.

사업규모 : L=823m, B=20～25m

사업내용 :

- 기존 중로1-8호선(지방도302호선) 확․포장(2차선→4차선)

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	7,103	4,714	2,389	0
국 비	4,243	4,243
교부세	0
도 비	141	141
시 비	330	330
기타( )	2,389		2,389		경기도시공사

세부 사업계획

추 진 일 정

- 공사착공  -------------------------------------------------------------------------------- 2012년 8월6일

- 공사준공  -------------------------------------------------------------------------------- 2013년6월30일

사업비 산출내역 : 7,103백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------- 2,823백만원

- 보상비  -------------------------------------------------------------------------------------  3,782백만원

- 기타(전기, 조경공사 등) ------------------------------------------------------------------- 498백만원

기대효과

물류단지 진입도로 개설을 통해 조성원가 인하 및 물류비용 절감.

지역주민의 삶의 질 향상 제고 및 도로이용의 효율성 제고.

대덕 내리도로(대로1-5호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 대덕면 내리 일원

사업기간 : 2012. 01. 01 ~ 2016. 12. 31.

사업규모 : L=950m, B=35m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	12,857	350	1,510	11,007
국 비
교부세
도 비
시 비	12,857	350	1,510	11007
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년 1월

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년12월

사업비 산출내역 : 12,857백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------   50백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------  3,225백만원

- 토지 및 지장물 보상  ----------------------------------------------------------------  9,552백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------  30백만원

기대효과

노폭이 협소한 도시계획도로 확포장과 지역균형발전 및 물류수송비     용 절감 및 균형있는 도시발전과 지역경제 활성화를 도모하고 통행     불편 및 주민숙원 해소

미양 양지도로(소로2-18외 1호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 미양면 양지리 일원

사업기간 : 2012. 01. 01 ~ 2013. 12. 31.

사업규모 : L=130m, B=8~10m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	850	500	350	0
국 비
교부세
도 비
시 비	850	500	350	0
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  -----------------------------------------------------------------------------------  2012년 1월

- 보상실시  -----------------------------------------------------------------------------------  2013년 1월

- 공사착공  -----------------------------------------------------------------------------------  2013년 3월

- 공사준공  -----------------------------------------------------------------------------------  2013년12월

사업비 산출내역 : 850백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------    20백만원

- 공사비  ---------------------------------------------------------------------------------------  218백만원

- 토지 및 지장물 보상  ------------------------------------------------------------------   592백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   20백만원

기대효과

미양농협 인근의 원활한 차량통행을 위하여 농협부터 역전 마을까       지 미 개설된 잔여구간 개설을 지속적으로 요구하는 민원으로 도시      계획도로를 개설하여 통행불편 해소로 균형발전과 지역주민의 삶의      질 향상

공도 진사도로(중로1-2외1호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 공도읍 진사리 일원

사업기간 : 2011. 01. 01 ~ 2013. 12. 31.

사업규모 : L=285m, B=10m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	2,200	1,000	1,200	0
국 비
교부세
도 비
시 비	2,200	1,000	1,200	0
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보상실시  -----------------------------------------------------------------------------------  2012년 5월

- 공사착공  -----------------------------------------------------------------------------------  2013년 1월

- 공사준공  -----------------------------------------------------------------------------------  2013년12월

사업비 산출내역 : 2,200백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------    40백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------   510백만원

- 토지 및 지장물 보상  ---------------------------------------------------------------    1,630백만원

- 시설부대비  --------------------------------------------------------------------------------    20백만원

기대효과

진사지구내 삼성@와 우림@의 진.출입로 폭이 협소하여 사고 위험과 주민

통행 불편을 초래하는 바 도로개설을 하여 쾌적한 도시환경조성 및 도시      발전과 지역경제 활성화를 도모 하고자 함

안성금산도로(소로2-52호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 금산동 일원

사업기간 : 2012.07 ~ 2013.12

사업규모 : L=180.0m, B=2.5~6m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	544	104	440	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	544	104	440	0
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 544백만원

- 설계용역비  ----------------------------------------------------------------------------------  10백만원

- 공사비  ---------------------------------------------------------------------------------------   82백만원

- 토지 및 지장물 보상  -------------------------------------------------------------------  442백만원

- 시설부대비  ----------------------------------------------------------------------------------  10백만원

기대효과

금산주공아파트와 주은청설아파트 사이의 미 개설된 도시계획도로       개설로 주민의 재산과 생명을 보호하고 통행불편 해소.

안성봉산도로(소로2-34호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 봉산동 일원

사업기간 : 2013.01 ~ 2014.12

사업규모 : L=40.0m, B=6m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	564	0	5	559
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	564	0	5	559
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 564백만원

- 설계용역비  ----------------------------------------------------------------------------------   5백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------- 110백만원

- 토지 및 지장물 보상  ------------------------------------------------------------------   439백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   10백만원

기대효과

봉산동 일원의 소방도로 기능을 겸비한 도시계획도로를 개설하여        주민숙원사업 및 통행불편 해소로 주민의 재산과 생명을 보호하여       장기 고질 민원 해소

일죽 송천도시계획도로(소로1-1호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 일죽면 송천리 일원

사업기간 : 2010. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=369m, B=10m(1차분 L=190m, 2차분 L=179m)

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,050	1,250	700	1,100
국 비
교부세
도 비
시 비	3,050	1,250	700	1,100
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 3월

- 공사준공 -------------------------------------------------------------------------------------- 2014년12월

사업비 산출내역 : 3,050백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------   80백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------   700백만원

- 토지 및 지장물 보상  -----------------------------------------------------------------  2,250백만원

- 시설부대비  ----------------------------------------------------------------------------------  20백만원

기대효과

2010.03월 실시설계 완료된 노선으로 도시기반시설 확충을 위한 도     시계획도로를 개설하여 교통소통의 원활을 기하고 지역간 균형발전     과 지역주민의 삶의 질 향상을 통한 주민숙원사업해소

공도 마정도로(중로2-4, 5호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 공도읍 마정리 일원

사업기간 : 2011. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=320m, B=15m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	2,200	550	700	950
국 비
교부세
도 비
시 비	2,200	550	700	950
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년 1월

- 문화재 발굴(시굴)실시  ----------------------------------------------------------------- 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 2,200백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------    50백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------    945백만원

- 토지 및 지장물 보상  ------------------------------------------------------------------  1,185백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   20백만원

기대효과

2011. 03월 실시설계 완료된 노선으로 아파트 상가 밀집 지역내 도     로기반 시설물을 체계적으로 조성하여 균형있는 도시발전과 지역경     제 활성화를 도모하고 통행불편 및 주민숙원 해소

죽산 구교동도로(중로1-1호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 죽산면 죽산리 구교동 일원

사업기간 : 2009. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=310m, B=20m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	4,000	1,000	700	2,300
국 비
교부세
도 비
시 비	4,000	1,000	700	2,300
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 4,000백만원

- 설계용역   ---------------------------------------------------------------------------------    43백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------    1,100백만원

- 토지 및 지장물 보상  -------------------------------------------------------------     2,837백만원

- 시설부대비  --------------------------------------------------------------------------------    20백만원

기대효과

2009.01월 실시설계 완료된 노선으로 도시기반시설 확충을 위한 도     시 계획도로를 개설하여 교통소통의 원활을 기하고 지역간 균형발전     과 지역주민의 삶의 질 향상을 통한 주민숙원사업해소.

안성 도기도로(소로2-114외1호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 도기동 일원

사업기간 : 2012. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=160m, B=6~8m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	2,031	20	300	1,711
국 비
교부세
도 비
시 비	2,031	20	300	1,711
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 2,031백만원

- 설계용역   ------------------------------------------------------------------------------------  20백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------   338백만원

- 토지 및 지장물 보상  ----------------------------------------------------------------   1,653백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   20백만원

기대효과

도기2통 마을내 좁은 골목길을 소방도로 기능이 가능하도록 확.포      장하여 국민의 재산과 생명을 보호하고 통행불편 해소로 주민숙원      사업 해결

공도 용두도로(대로3-11호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 공도읍 용두리 일원

사업기간 : 2012. 01. 01 ~ 2013. 12. 31.

사업규모 : L=164m, B=29m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,100	300	2,800	0
국 비
교부세
도 비
시 비	3,100	300	2,800	0
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 : 3,100백만원

- 설계용역   ----------------------------------------------------------------------------------   40백만원

- 공사비  -----------------------------------------------------------------------------------   1,000백만원

- 토지 및 지장물 보상  ----------------------------------------------------------------   2,040백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   20백만원

기대효과

공도보건지소 및 터미널 이전부지에 도시계획도로 개설로 통행불편      해소 및 지역간 균형발전 도모

서운 신촌도로(소로1-1호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 서운면 신촌리 일원

사업기간 : 2013. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=80m, B=10m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	830	0	20	810
국 비
교부세
도 비
시 비	830	0	20	810
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역  ------------------------------------------------------------------------------ 2013년01월

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년03월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 830백만원

- 설계용역   ----------------------------------------------------------------------------------   20백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------   300백만원

- 토지 및 지장물 보상  ------------------------------------------------------------------   500백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   10백만원

기대효과

서운면사무소 앞 미정비된 도시계획도로를 개설하여 주민숙원사업       및 통행불편해소로 주민의 재산과 생명을 보호하여 장기 고질 민원      해소

안성 가현도로(소로2-93호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 가현동 일원

사업기간 : 2013. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=400m, B=8m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,496	0	20	1,476
국 비
교부세
도 비
시 비	1,496	0	20	1,476
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역  ------------------------------------------------------------------------------ 2013년01월

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년03월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 1,496백만원

- 설계용역   ---------------------------------------------------------------------------------    20백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------    672백만원

- 토지 및 지장물 보상  --------------------------------------------------------------------  784백만원

- 시설부대비  --------------------------------------------------------------------------------    20백만원

기대효과

가현1통마을 진입로를 소방도로 기능을 겸비한 도시계획도로로 확.      포장하여 주민숙원사업 및 통행불편 해소로 주민의 재산과 생명을      보호하여 장기 고질 민원 해소

안성 옥산도로(소로3-10호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 옥산동 일원

사업기간 : 2013. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=334m, B=6m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,889	0	220	1,669
국 비
교부세
도 비
시 비	1,889	0	220	1,669
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역  ------------------------------------------------------------------------------ 2013년01월

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년07월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년03월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 1,889백만원

- 설계용역   ---------------------------------------------------------------------------------    20백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------    421백만원

- 토지 및 지장물 보상  ----------------------------------------------------------------   1,428백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   20백만원

기대효과

옥산동 일원의 소방도로 기능을 겸비한 도시계획도로를 개설하여        주민숙원사업 및 통행불편 해소로 주민의 재산과 생명을 보호하여      장기 고질 민원 해소

안성 명륜도로(중로3-3호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 명륜동 일원

사업기간 : 2013. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=530m, B=12m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	4,000	0	2,664	1,336
국 비
교부세
도 비
시 비	4,000	0	2,664	1,336
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역  ------------------------------------------------------------------------------ 2013년01월

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년05월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년03월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 4,000백만원

- 설계용역   ----------------------------------------------------------------------------------   50백만원

- 공사비  -----------------------------------------------------------------------------------   1,336백만원

- 토지 및 지장물 보상  ----------------------------------------------------------------   2,594백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   20백만원

기대효과

금산동 구포동 명륜동 일원의 도시계획도로에 대하여 명륜천 개량       공사와 연계개설하여 주민숙원사업 및 통행불편 해소로 주민의 재      산과 생명을 보호하여 장기고질 민원 해소.

미양 양지도로(소로2-21외1호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 미양면 양지리 일원

사업기간 : 2013. 01. 01 ~ 2014. 12. 31.

사업규모 : L=190m, B=8m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,000	0	20	980
국 비
교부세
도 비
시 비	1,000	0	20	980
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역  ------------------------------------------------------------------------------ 2013년01월

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년03월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 1,000백만원

- 설계용역   ----------------------------------------------------------------------------------   20백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------   336백만원

- 토지 및 지장물 보상  ------------------------------------------------------------------   624백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------   20백만원

기대효과

미양면 양지리 기존 도로가 미 개설되어 통행에 불편을 초래하여        도시계획 도로를 개설하여 주민숙원사업 및 통행불편 해소로 주민      의 재산과 생명을 보호하고 지속적인 민원해소.

공도 승두도로(소로2-18외1호선)개설공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 공도읍 승두리 일원

사업기간 : 2013. 01. 01 ~ 2016. 12. 31.

사업규모 : L=180m, B=8m

사업내용 : 지역주민 민원해소 및 통행불편 해소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,500	0	22	3,478
국 비
교부세
도 비
시 비	3,500	0	22	3,478
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역  ------------------------------------------------------------------------------ 2013년01월

- 보상실시  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년03월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년12월

사업비 산출내역 : 3,500백만원

- 설계용역   ----------------------------------------------------------------------------------   22백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------   375백만원

- 토지 및 지장물 보상  ---------------------------------------------------------------   3,083백만원

- 시설부대비  --------------------------------------------------------------------------------   20백만원

기대효과

공도읍 승두리 일원의 소방도로 기능을 겸비한 도시계획도로를 개       설하여 주민숙원사업 및 통행불편 해소로 주민의 재산과 생명을 보      호하여 장기 고질 민원해소

일죽면 소재지 종합정비사업

사 업 개 요

위    치 : 일죽면 송천리 일원

사업기간 : 2013년 1월 ～ 2016년 12월

사업규모 : 7,000백만원(국비 4,900, 도비 630, 시비 1,470)

사업내용 : 면소재지 정비사업 1식

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	7,000	0	955	6,045
국 비	4,901		669	4,232
교부세	0
도 비	630		86	544
시 비	1,469		200	1,269
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 기본 및 실시설계  -------------------------------------------------------------- 2013년 1월 ~ 12월

- 공사 착공  --------------------------------------------------------------------------------- 2014년  3월

- 공사 준공  --------------------------------------------------------------------------------- 2016년 12월

사업비 산출내역 :   7,000백만원

- 기초생활기반(도로, 복지시설, 운동휴양)  ----------------------------------------  2,500백만원

- 지역경관개선(수목식재, 가로경관정비 등)  -------------------------------------  4,000백만원

- 부대비용(기본․실시설계)  -------------------------------------------------------------  500백만원

기대효과

일죽 면소재지에 대하여 생활편의, 문화 복지시설등의 종합적인 정비·확충 및 지역경관개선으로 면소재지 활성화

죽산면 소재지 종합정비사업

사 업 개 요

위    치 : 죽산면 죽산리 일원

사업기간 : 2013년 1월 ～ 2016년 12월

사업규모 : 7,000백만원(국비 4,900, 도비 630, 시비 1,470)

사업내용 : 면소재지 정비사업 1식

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	7,000	0	857	6,143
국 비	4,900		600	4,300
교부세	0
도 비	630		77	553
시 비	1,470		180	1,290
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 기본 및 실시설계  -------------------------------------------------------------- 2013년 1월 ~ 12월

- 공사 착공  --------------------------------------------------------------------------------- 2014년  3월

- 공사 준공  --------------------------------------------------------------------------------- 2016년 12월

사업비 산출내역 :  7,000백만원

- 기초생활기반(복지시설, 운동휴양)  ------------------------------------------------  1,500백만원

- 지역경관개선(경관수목, 생태공원, 생태하천정비, 가로경관정비)  -------  5,000백만원

- 부대비용(기본․실시설계)  -------------------------------------------------------------  500백만원

기대효과

죽산 면소재지에 대하여 생활편의, 문화 복지시설등의 종합적인 정비·확충 및 지역경관 개선으로 면소재지 활성화

안성맞춤대로 지중화 사업

사 업 개 요

위    치 : 안성맞춤대로(안성대교 ~ 금산교차로) L=1.1km

사업기간 : 2013년 1월 ～ 2013년 8월

사업규모 : 7,900백만원(시5,400백만원, 민자2,500백만원)

사업내용 :

- 전선․통신 지중화

- 보행환경개선 공사(보도, 공공시설물, 조경, 도로포장 등)

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	7,900	0	7,900	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	5,400		5,400
기타(민자)	2,500		2,500

세부 사업계획

추 진 일 정

- 협약체결 및 실시설계 ---------------------------------------------- 2012년 12월 ~ 2013년 2월

- 관로공사 착공(한전․통신) ---------------------------------------------------- 2013년 3월 ~ 6월

- 보행환경개선 공사 -------------------------------------------------------------- 2013년 6월 ~ 8월

사업비 산출내역 : 7,900백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  7,840백만원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------------ 50백만원

- 감리비․시설부대비  ------------------------------------------------------------------------ 10백만원

기대효과

구도심 슬럼화 예방 및 활력화를 위한 도시 인프라를 구축하여

한전, 통신선로를 지중화함으로 쾌적한 도시환경 조성 및 보행환경 개선

고삼면 소재지 정비공사

사 업 개 요

위    치 : 고삼면 가유리 지내(국지도 82호선)

사업기간 : 2013. 01.  ~ 2013. 12.

사업규모 : L=0.53㎞, B=5.0m

사업내용 :

- 보도설치 0.53㎞(보도내 수로 설치), 가로등 신설, 가로수 식재 등

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,016	16	1,000	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	1,016	16	1,000	0
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년12월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

기대효과

보도가 없는 도로에 보도를 신설함으로서 주민들에게 안전한 보행환경 제공

소재지와 고삼호수를 연결하는 보행동선 구축 및 호수의 고장임을 부각함으로서 관광도시로서의 지역 활성화에 기여

방신~문기간 도로확·포장공사

사 업 개 요

위    치 : 양성면 방신리 ~ 공도읍 마정리 지내(농어촌도로 202호선)

사업기간 : 2007. 02.  ~ 2014. 6. (공사 40% 보상 92%)

사업규모 : L=3.5㎞, B=8.0m (2차로)

사업내용 :

- 아스콘 포장 3.5㎞

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	14,500	10,856	2,000	1,644
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	14,500	10,856	2,000	1,644
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2007년 2월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년 2월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 6월

사업비 산출내역 :  14,500백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------- 4,593백만원

- 보상비  --------------------------------------------------------------------------------------- 9,493백만원

- 기  타  ---------------------------------------------------------------------------------------  414백만원

기대효과

노폭이 협소한 도로를 확·포장하여 주민통행불편 해소

지역 교통여건 개선으로 주민의 살믜 질 향상과 지역산업발전 기여

삼흥~옥정간 도로확·포장공사

사 업 개 요

위    치 : 금광면 삼흥리, 사흥리 지내(농어촌도로 304호선)

사업기간 : 1996. 05. ~ 2014. 12. (공사 0% 보상 98%)

사업규모 : L=1.9㎞, B=8.0m (2차로)

사업내용 :

- 아스콘포장 1.9㎞

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,285	795	500	1,990
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	3,285	795	500	1,990
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계(보완설계)--------------------------------------------------------- 1996년 5월(2012년 4월)

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 :  3,285백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------2,462백만원

- 보상비  ----------------------------------------------------------------------------------------- 802백만원

- 기  타  -----------------------------------------------------------------------------------------  21백만원

기대효과

노폭이 협소한 도로를 확·포장하여 주민통행불편 해소

지역 교통여건 개선으로 주민의 살믜 질 향상과 지역산업발전 기여

모산~소현간 도로확·포장공사

사 업 개 요

위    치 : 대덕면 모산리 ~ 소현리 지내(농어촌도로 204호선)

사업기간 : 2009. 11. ~ 2016. 12. (공사  0% 보상  0%)

사업규모 : L=2.5㎞, B=10.0m (2차로)

사업내용 :

- 아스콘 포장 L=2.5㎞

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	11,000	195	250	10,555
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	11,000	195	250	10,555
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2009년11월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년12월

사업비 산출내역 :  11,000백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------- 11,000백만원

- 보상비  ----------------------------------------------------------------------------------------7,893백만원

- 기  타  ------------------------------------------------------------------------------------------391백만원

기대효과

노폭이 협소한 도로를 확·포장하여 주민통행불편 해소

지역 교통여건 개선으로 주민의 살믜 질 향상과 지역산업발전 기여

원곡 성은 도로확·포장공사

사 업 개 요

위    치 : 원곡면 성은리 지내(농어촌도로 201호선)

사업기간 : 2011. 07. ~ 2014. 07. (공사  0% 보상  0%)

사업규모 : L=1.0㎞, B=9.5m (2차로)

사업내용 :

- 아스콘 포장 L=1.0㎞

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,000	150	1,000	1,850
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	3,000	150	1,000	1,850
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2009년11월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년12월

사업비 산출내역 :  3,000백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------1,850백만원

- 보상비  ----------------------------------------------------------------------------------------1,000백만원

- 기  타  ----------------------------------------------------------------------------------------- 150백만원

기대효과

노폭이 협소한 도로를 확·포장하여 주민통행불편 해소

지역 교통여건 개선으로 주민의 살믜 질 향상과 지역산업발전 기여

장능~장계간 도로확·포장공사

사 업 개 요

위    치 : 죽산면 장능리 ~ 장계리 지내(농어촌도로 202호선)

사업기간 : 2010. 10. ~ 2015. 12. (공사  0% 보상 39%)

사업규모 : L=2.36㎞, B=10.0m (2차로)

사업내용 :

- 아스콘 포장 L=2.36㎞

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	6,840	2,200	500	4,140
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	6,840	2,200	500	4,140
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2010년10월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년 7월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년12월

사업비 산출내역 :  6,840백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------- 6,840백만원

- 보상비  -------------------------------------------------------------------------------------- 3,683백만원

- 기  타  ---------------------------------------------------------------------------------------  184백만원

기대효과

노폭이 협소한 도로를 확·포장하여 주민통행불편 해소

지역 교통여건 개선으로 주민의 살믜 질 향상과 지역산업발전 기여

종합운동장~금광호수간 도로확·포장공사

사 업 개 요

위    치 : 금광면 신양복리 ~ 금광리 지내(시도 8호선)

사업기간 : 2005. 07. ~ 2016. 12.

사업규모 : L=1.2㎞, B=25.0m (2차로)

사업내용 :

- 아스콘 포장 L=1.2㎞

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	8,100	35	500	7,565
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	8,100	35	500	7,565
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2005년 7월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년12월

사업비 산출내역 :  8,100백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------- 4,400백만원

- 보상비  --------------------------------------------------------------------------------------- 3665백만원

- 기  타  ---------------------------------------------------------------------------------------   35백만원

기대효과

노폭이 협소한 도로를 확·포장하여 주민통행불편 해소

지역 교통여건 개선으로 주민의 살믜 질 향상과 지역산업발전 기여

계동~중리동간 도로확·포장공사

사 업 개 요

위    치 : 안성시 계동 ~ 중리동(시도 8호선)

사 업 량 : 2006. 12. ~ 2016. 12. (공사  0% 보상  0%)

사업규모 : L=2.2㎞, B=12.0m (2차로)

사업내용 :

- 아스콘 포장 L=2.2㎞

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	11,000	96	500	10,404
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	11,000	96	500	10,404
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2006년12월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년12월

사업비 산출내역 :  11,000백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------- 4,100백만원

- 보상비  -------------------------------------------------------------------------------------- 6,804백만원

- 기타    ------------------------------------------------------------------------------------------ 96백만원

기대효과

노폭이 협소한 도로를 확·포장하여 주민통행불편 해소

지역 교통여건 개선으로 주민의 살믜 질 향상과 지역산업발전 기여

승두~신두간 도로확·포장공사

사 업 개 요

위    치 : 공도읍 승두리~ 신두리 양기리지내(농어촌도 202호선)

사업기간 : 2013. 01. ~ 2015. 12. (공사  0% 보상  0%)

사업규모 : L=1.8㎞, B=10.0m (2차로)

사업내용 :

- 아스콘 포장 1.8㎞

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	6,000	0	180	5,820
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	6,000	0	180	5,820
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2016년12월

사업비 산출내역 :  6,000백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------- 2,600백만원

- 보상비  --------------------------------------------------------------------------------------- 1,600백만원

- 기  타  ---------------------------------------------------------------------------------------  180백만원

기대효과

노폭이 협소한 도로를 확·포장하여 주민통행불편 해소

지역 교통여건 개선으로 주민의 살믜 질 향상과 지역산업발전 기여

농촌생활환경 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 보개면, 대덕면, 양성면

사업기간 : 2013.01~2013.06

사업내용 : 도로 정비등 L=25.11km (20개소)

- 도로정비 : L=17.09km(9개소)

- 배수로 정비 : L=6.02km(8개소)

- 공원조성 : 4,550㎡(1개소)

- 보도 정비 : L=1.05km(2개소)

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	4,035	0	4,035	0
국 비	2,824		2,824
교부세	0
도 비	361		361
시 비	850		850
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 6월

사업비 산출내역 : 4,035백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  3,897백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------  133백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------    5백만원

기대효과

농촌지역의 기초생활환경, 문화․복지시설 등을 종합적으로 정비․확충     하여 국토의 균형 발전 도모

기계화경작로 확포장사업

사 업 개 요

위    치 : 금광면 농촌지구외 3개소

사업기간 : 2013.01~2013.06

사업내용 : 농로 L=4.8km (4개소)

구분	시(2개소, L= 2.5㎞)	한국농어촌공사(2개소, L= 2.3㎞)
위치	금광면 농촌지구 L=1.5㎞ (179,714천원)	양성면 노곡지구 L=1.2㎞(144,000천원)
	일죽면 장암지구 L=1.2㎞ (120,000천원)	서운면 마둔지구 L=1.1㎞(132,000천원)

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	575	0	575	0
국 비	403		403
교부세	0
도 비	86		86
시 비	86		86
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 6월

사업비 산출내역 : 575백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------   547백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------   26백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------    2백만원

기대효과

기계화 영농기반 구축으로 농업생산성을 향상시키고 농촌생활 환경개선 도모

농촌마을 종합개발사업(용설권역)

사 업 개 요

위    치 : 죽산면 용설리일원(설동, 당북, 거곡, 한실마을)

사업기간 : 2009.01~2013.12

사업내용 :

- 다목적문화회관 증축(1층 증100㎡, 3층 증224.74㎡) : 2012년 ~ 계속

- 당북 쉼터 조성 : 부지조성 및 조경시설등 (3,383.9㎡)

- 권역안내판 설치 : 종합안내판 1개소, 소형안내판 4개소

- 농촌문화시설 정비 : 자전거, 안전장비, 자전거 보관소 각 1식

- 지역역량강화 : 마을운용지원, 문화복지프로그램, 홍보마케팅지원등

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	4,300	3,543	757	0
국 비	3,010	2,480	530
교부세	0
도 비	412	344	68
시 비	878	719	159
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 시행계획승인  ---------------------------------------------------------------------------- 2012년 12월

- 공사착공  ---------------------------------------------------------------------------------- 2013년  3월

- 공사준공  ---------------------------------------------------------------------------------- 2013년 12월

사업비 산출내역 : 757백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------   529백만원

- s/w(마을운영지원등)  ------------------------------------------------------------------  108백만원

- 부대비  -------------------------------------------------------------------------------------  120백만원

기대효과

농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민 소득기반 확충

살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주공간 조성으로 희망과 활력 고취

농촌마을 종합개발사업(미리내권역)

사 업 개 요

위    치 : 양성면 미산리일원(상촌, 중촌, 약산마을)

사업기간 : 2013.01~2016.12

사업내용 :

- 기초생활기반 : 다목적회관 리모델링 330㎡, 저수지 둘레길 정비 L=1㎞

미리내 산책로 L=3㎞, 하천정비 2개소

- 지역소득증대 : 연꽃 가공 공장 1개소

- 지역경관개선 : 느티나무 공원조성 1개소, 생태하천 정비 1개소

안내간판 설치 5개소

- 지역역량강화 : 문화복지프로그램개발, 권역활성화 컨설팅 및 이벤트개발

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,250	0	341	2,909
국 비	2,284		239	2,045
교부세	0
도 비	463		31	432
시 비	503		71	432
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 기본계획수립  ------------------------------------------------------------------------ 2013년 01~05월

- 실시설계  ---------------------------------------------------------------------------------- 2013년  8월

- 시행계획인가  ----------------------------------------------------------------------------- 2013년 12월

사업비 산출내역 : 341백만원

- s/w(교육훈련등) -------------------------------------------------------------------------   60백만원

- 부대비  -------------------------------------------------------------------------------------  281백만원

기대효과

농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민 소득기반 확충

살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주공간 조성으로 희망과 활력 고취

봄마무리 대구획 경지정리사업

사 업 개 요

위    치 : 금광면 내우리, 대덕면 신령리

사업기간 : 2013.01~2013.10

사업내용 : 125.4ha

- 금광 마둔 2-1지구 60ha, 대덕 신령 1-3지구 65.4ha

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,391	0	3,391	0
국 비	2,713		2,713
교부세	0
도 비	339		339
시 비	339		339
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년  1월

- 공사착공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년  3월

- 공사준공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 10월

사업비 산출내역 : 3,391백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  3,251백만원

- 설계용역비  -------------------------------------------------------------------------------   135백만원

- 부대비  ---------------------------------------------------------------------------------------    5백만원

기대효과

기 경지정리된 평야부의 기반시설이 미흡한 지역을 대형농기계 영농에 알맞도록 재정비

영농편의 및 농가 소득 증대 도모 및 농업생활환경 제고

수리시설 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 고삼면 가유리외 9개소

사업기간 : 2013.01~2013.06

사업내용 : 배수로 L=2.526km (10개소)

구분	시(9개소, L=2.5㎞)		한국농어촌공사(1개소, L=0.026㎞)
위치	고삼면 가유지구 L=0.18㎞ (1.2*1.2, 39,000천원)	공도읍 심교지구 L=0.32㎞ (1*1, 39,000천원)	공도읍 진사지구 L=0.026㎞ (교량 1개소, 260,000천원)
	금광면 오흥지구 L=0.265㎞ (1*1, 31,000천원)	미양면 법전지구 L=0.25㎞ (0.5*0.5～0.6*0.6, 16,000천원)
	원곡면 내가천지구 L=0.18㎞ (2*1.5, 65,000천원)	일죽면 가리지구 L=0.58㎞ (0.8*0.7, 53,000천원)
	죽산면 한평지구 L=0.4㎞ (0.6*0.6, 25,000천원)	삼죽면 상장지구 L=0.2㎞ (0.5*0.5, 12,000천원)
	서운면 현매지구 L=0.125㎞ (3*1, 60,000천원)

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	600	0	600	0
국 비	0
교부세	0
도 비	240		240
시 비	360		360
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 6월

사업비 산출내역 : 600백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------   564백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------   36백만원

기대효과

토공 배수로를 구조물화 하여 재해 사전예방 및 영농 편의 도모

적기 원활한 농업용수 공급으로 농업생산성 증대기여

공도버스정류장 및 환승주차장 건설사업

사 업 개 요

위    치 : 공도읍 용두리 272-1번지 일원

사업기간 : 2012.07. ~ 2013.12.

사업규모 : 버스정류장 및 환승주차장 1식(A=6,634㎡)

사업내용 :

- 환승주차장 100대

- 근린생활시설(대합실, 화장실, 소매점 등, 2층 구조) 792㎡

- 차량등록실 공도분소(사무실, 번호제작소, 2층 구조) 330㎡

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	4,935	3,363	1,572	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	4,935	3,363	1,572
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 도시관리계획 재정비 지형도면고시 --------------------------------------------------- ‘12. 09.28.

- 토지보상계획열람 공고 ---------------------------------------------------------------- ‘12.11.26.

- 공사 착공 ----------------------------------------------------------------------------------------- 2013.03.

- 공사 준공 ----------------------------------------------------------------------------------------- 2013.12.

사업비 산출내역 : 4,935백만원

- 보상비  -------------------------------------------------------------------------------------  3,363백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  1,572백만원

기대효과

공도 버스정류장는 공도 중앙로 도로변에 설치되어 있어 교통혼잡을 유발하여

시민의 불편 및 환승객의 불편을 해소하기 위하여 버스정류장 및 환승주차장을 설치코자 함

반석아파트 앞 교차로 체계개선사업

사 업 개 요

위    치 : 일죽면 송천리 485번지 일원

사업기간 : 2012.01. ~ 2013.12.

사업규모 : 도시계획도로 개설 및 교차로 이전

사업내용 :

- 도시계획도로 개설(L=170m, B=8m)

- 교차로 이전(대송마을 앞 → 반석아파트 앞)

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,000	700	300	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	1,000	700	300
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 비관리청이 공사시행허가 ------------------------------------------------------------- ‘12.08.13.

- 도시관리계획 재정비 지형도면고시 ----------------------------------------------------- ‘12.09.28.

- 공사발주 ------------------------------------------------------------------------------------ ‘12.12.06.

- 공사 착공 ----------------------------------------------------------------------------------------- 2013.03.

- 공사 준공 ----------------------------------------------------------------------------------------- 2013.12.

사업비 산출내역 : 1,000백만원

- 보상비  ---------------------------------------------------------------------------------------  300백만원

- 공사비  ---------------------------------------------------------------------------------------  700백만원

기대효과

일죽 반석아파트 진·출입로와 대송마을 진·출입로가 국도38호선의 부채도로에 접속되어 있어 이를 개선하여 주민의 오랜 숙원사업을 해결하고자 함

안성천 수해상습지 개선사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 삼죽면 미장리 ~ 내강리 일원

사업기간 : 2012년 ~ 2015년(4년간)

사업규모 : 하천개수 L=2.5㎞

사업내용 : 하천개수 L=2.5㎞, 교량 9개소, 배수시설 28개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	12,000	250	1,000	10,750
국 비	7,200	150	600	6,450
교부세	0	0	0	0
도 비	4,800	100	400	4,300
시 비	0
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역 착수  ---------------------------------------------------------------------- 2012. 04. 12

- 보상(토지, 지장물)  --------------------------------------------------------------- 2013년01월~12월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 : 12,000백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------  250백만원

- 보상비  ------------------------------------------------------------------------------------  3,950백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------  7,790백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------  10백만원

기대효과

지방하천으로 시설기준에 미달되어 집중호우 시 상습적인 수해발생

하천기본계획에 의한 하천개량으로 재해로부터 시민의 생명과 재산보호

당목천 수해상습지 개선사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 죽산면 당목리 ~ 두교리 일원

사업기간 : 2007년 ~ 2013년(7년간)

사업규모 : 하천개수 L=3.45㎞

사업내용 : 하천개수 L=3.45㎞, 교량 8개소, 배수시설 31개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	16,791	13,458	3,333	0
국 비	10,074	8,074	2,000	0
교부세	0	0	0	0
도 비	6,717	5,384	1,333	0
시 비	0
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역 완료  ---------------------------------------------------------------------- 2007. 03. 09

- 공사착공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2010. 03. 26

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 : 16,791백만원

- 보상비  ------------------------------------------------------------------------------------  4,566백만원

- 공사비  -----------------------------------------------------------------------------------  12,215백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------  10백만원

기대효과

지방하천으로 시설기준에 미달되어 집중호우 시 상습적인 수해발생

하천기본계획에 의한 하천개량으로 재해로부터 시민의 생명과 재산보호

통복천 수해상습지 개선사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 원곡면 내가천리 ~ 외가천리 일원

사업기간 : 2013년 ~ 2015년(3년간)

사업규모 : 하천개수 L=1.35㎞

사업내용 : 하천개수 L=1.35㎞, 배수시설 29개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	4,574	0	1,667	2,907
국 비	2,744	0	1,000	1,744
교부세	0	0	0	0
도 비	1,830		667	1,163
시 비	0
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역 착수  ---------------------------------------------------------------------- 2013년01월

- 보상(토지 및 지장물)  ------------------------------------------------------------------- 2013년07월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년12월

사업비 산출내역 : 4,574백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------  160백만원

- 보상비  ------------------------------------------------------------------------------------  2,058백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------  2,346백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------  10백만원

기대효과

지방하천으로 시설기준에 미달되어 집중호우 시 상습적인 수해발생

하천기본계획에 의한 하천개량으로 재해로부터 시민의 생명과 재산보호

월동천(자연형) 개수사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 금광면 내우리 ~ 상중리 일원

사업기간 : 2013년 ~ 2015년(3년간)

사업규모 : 하천개수 L=5.95㎞

사업내용 : 하천개수 L=5.95㎞, 교량 7개소, 배수시설 46개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	21,500	0	450	21,050
국 비	0	0	0	0
교부세	0	0	0	0
도 비	21,500	0	450	21,050
시 비	0
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계용역 착수  ---------------------------------------------------------------------- 2013년03월

- 보상(토지 및 지장물)  ------------------------------------------------------------------- 2014년01월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년06월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년12월

사업비 산출내역 : 21,500백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------  450백만원

- 보상비  ------------------------------------------------------------------------------------  7,525백만원

- 공사비  -----------------------------------------------------------------------------------  13,515백만원

- 시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------------  10백만원

기대효과

지방하천으로 시설기준에 미달되어 집중호우 시 상습적인 수해발생

하천기본계획에 의한 하천개량으로 재해로부터 시민의 생명과 재산보호

죽림 소하천 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 일죽면 죽림리 일원

사업기간 : 2012년 ~ 2015년

사업규모 : 소하천정비 L=2.0km

사업내용 : 소하천정비 L=2.0km, 교량 9개소, 배수통관  7개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	5,806	60	1,500	4,246
국 비	2,903		750	2,153
교부세	0
도 비	0
시 비	2,903	60	750	2,093
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2011년10월

- 보상(토지 및 지장물)  ------------------------------------------------------------------- 2013년01월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년12월

사업비 산출내역 : 5,806백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------------60백만원

- 보상비  ----------------------------------------------------------------------------------------1,054백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------4,692백만원

- 감리비․시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------0백만원

기대효과

소하천으로 시설기준에 미달되는 시설물 정비로 시민의 생명과 재산보호

아름다운 소하천정비를 통해 친수공간 확보 및 시민의 삶의 질 향상

호동 소하천 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 고삼면 신창리 일원

사업기간 : 2012년 ~ 2015년

사업규모 : 소하천정비 L=1.7km

사업내용 : 소하천정비 L=1.7km, 교량 3개소, 배수통관 2개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,650	60	1,200	2,390
국 비	1,825		600	1,225
교부세	0
도 비	0
시 비	1,825	60	600	1,165
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2011년10월

- 보상(토지 및 지장물)  ------------------------------------------------------------------- 2013년01월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년12월

사업비 산출내역 : 3,650백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------------60백만원

- 보상비  ----------------------------------------------------------------------------------------1,041백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------2,549백만원

- 감리비․시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------0백만원

기대효과

소하천으로 시설기준에 미달되는 시설물 정비로 시민의 생명과 재산보호

아름다운 소하천정비를 통해 친수공간 확보 및 시민의 삶의 질 향상

북보 소하천 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 보개면 북좌리 일원

사업기간 : 2012년 ~ 2015년

사업규모 : 소하천정비 L=1.3km

사업내용 : 소하천정비 L=1.3km, 교량 4개소, 배수통관 5개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,172	0	1,274	1,898
국 비	1,586		637	949
교부세	0
도 비	0
시 비	1,586		637	949
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년01월

- 보상(토지 및 지장물)  ------------------------------------------------------------------- 2013년08월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년12월

사업비 산출내역 : 3,172백만원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------------195백만원

- 보상비  ----------------------------------------------------------------------------------------1,274백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------1,703백만원

- 감리비․시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------0백만원

기대효과

소하천으로 시설기준에 미달되는 시설물 정비로 시민의 생명과 재산보호

아름다운 소하천정비를 통해 친수공간 확보 및 시민의 삶의 질 향상

사곡 소하천 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 사곡동 일원

사업기간 : 2012년 ~ 2015년

사업규모 : 소하천정비 L=0.95km

사업내용 : 소하천정비 L=0.95km, 교량 1개소, 배수통관 3개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	2,358	0	1,095	1,263
국 비	1,179		547	632
교부세	0
도 비	0
시 비	1,179		548	631
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년01월

- 보상(토지 및 지장물)  ------------------------------------------------------------------- 2013년08월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년01월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2015년12월

사업비 산출내역 : 2,358백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------------0백만원

- 보상비  ----------------------------------------------------------------------------------------1,500백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------------858백만원

- 감리비․시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------0백만원

기대효과

소하천으로 시설기준에 미달되는 시설물 정비로 시민의 생명과 재산보호

아름다운 소하천정비를 통해 친수공간 확보 및 시민의 삶의 질 향상

금노 소하천 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 원곡면 칠곡리 일원

사업기간 : 2012년 ~ 2013년

사업규모 : 소하천정비 L=0.35km

사업내용 : 소하천정비 L=0.35km, 암거박스 1개소, 배수통관 1개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	728	147	581	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	728	147	581
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년09월

- 보상(토지 및 지장물)  ------------------------------------------------------------------- 2012년10월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 : 728백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------------0백만원

- 보상비  ------------------------------------------------------------------------------------------147백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------------581백만원

- 감리비․시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------0백만원

기대효과

소하천으로 시설기준에 미달되는 시설물 정비로 시민의 생명과 재산보호

아름다운 소하천정비를 통해 친수공간 확보 및 시민의 삶의 질 향상

방삼 소하천 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 원곡면 칠곡리 일원

사업기간 : 2012년 ~ 2013년

사업규모 : 소하천정비 L=0.24km

사업내용 : 소하천정비 L=0.24km 암거박스 2개소, 배수통관 1개소

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	572	113	459	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	572	113	459
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년09월

- 보상(토지 및 지장물)  ------------------------------------------------------------------- 2012년10월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 : 572백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------------0백만원

- 보상비  ------------------------------------------------------------------------------------------113백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------------459백만원

- 감리비․시설부대비  ---------------------------------------------------------------------------0백만원

기대효과

소하천으로 시설기준에 미달되는 시설물 정비로 시민의 생명과 재산보호

아름다운 소하천정비를 통해 친수공간 확보 및 시민의 삶의 질 향상

공도 용두자연재해위험지구 정비사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 공도읍 용두리 239번지 일원

사업기간 : 2012. 2 ~ 2014. 12

사업규모 : 관거개량 1식

사업내용 :

- 우수관거 신설 D600mm L= 347.5m

- 관거 개량(BOX 3.0*1.5~BOX 5.0*2.0) L= 1.03km

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	5,790	300	5,000	490
국 비	3,474	180	3000	294
교부세	0
도 비	695	36	600	59
시 비	1,621	84	1400	137
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 보상추진  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 도시계획시설결정 고시 및 용역준공 ------------------------------------------------ 2013년 5월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 5월

- 공사준공(2013년분)  ---------------------------------------------------------------------- 2013년12월

사업비 산출내역 : 5,790백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------ 5,231 백만원

- 보상비  ----------------------------------------------------------------------------------    559 백만원

기대효과

상류유역면적(65ha)에 비해 배수로 관로 용량의 부족 및 하류의 배수로

관망의 미정비로 인한 내수배제 불가

자연재해위험지구로 지정된 지역에 건물 21동, 침수예방 4.86a【시가지

(도로)0.1ha,농경지4.85ha】

우기시 용머리초교 학생들의 통학 및 주민들의 위험성 해소

38국도 원활한 교통 흐름과 공장의 안정적인 물류통행로 확보

농기계 임대사업

사 업 개 요

위    치 : 맞춤랜드 내

사업기간 : 2013년 2월~12월

사업규모 : 1,600㎡

사업내용

- 임대사업장 신축 : 500백만원

- 농기계 구입 : 500백만원

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,350	0	1,000	350
국 비	500		500
교부세	0
도 비	150		150
시 비	700		350	350
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 조례개정 ------------------------------------------------------------------------------ -------2013년 1월

- 부지선정 ---------------------------------------------------------------------------------------2013년 2월

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 5월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년10월

사업비 산출내역  : 1,000백만원

- 임대사업장 신축  -----------------------------------------------------------------------------482백만원

- 신축 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------18백만원

- 농기계 구입비  -----------------------------------------------------------------------------  500백만원

기대효과

농촌의 고령화에 따른 농작업 애로사항 해결 및 이용편의 제공으로      만족하는 농업서비스 제공

농기계 이용률 제고 및 농업경쟁력 향상으로 농가소득 증대 도모

귀농 및 귀촌인과 소규모 농업인들의  농기계 구입 부담 경감

환경친화적 청정산업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 보개면 북좌리 245-14

사업기간 : 2012.1.~2013. 12.

사업규모 : 생산시설 1식(부지3,300㎡, 제조시설481.54㎡)

사업내용 : 시설 및 장비 설치

- 상토생산시설 1식, 상토생산 기계설비 1식

- 기타 부대시설 장비 등

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,331	667	664	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	538	267	271
기타( )	793	400	393

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 2월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 5월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 : 1,331백만원

- 공사비  ---------------------------------------------------------------------------------------- 632백만원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------------54.6백만원

- 감리비․시설부대비  ----------------------------------------------------------------------644.4백만원

기대효과

유용미생물과 소각폐열을 이용한 인삼전용상토 생산

친환경인삼 재배면적 확대를 통한 안성인삼 고급화

급수취약지역 수도시설 확충사업

사 업 개 요

위    치 : 공도읍 신두리 외 16개 마을

사업기간 : 2013. 03. ~ 08

사업규모 : 배수관로 설치(D50~100)mm, L=22.7km

사업내용 : 배수관로 설치(D50~100)mm, L=22.7km

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	4,000		4,000
국 비	0
교부세	0
도 비	200		200
시 비	3,800		3,800
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 03월

- 공사착공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 03월

- 공사준공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 08월

사업비 산출내역 : 4,000백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------- 3,760 백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------- 240 백만원

기대효과

마을내 식수원의 수질오염과 식수원부족으로 상수관로 신설 건의

광역상수도 공급으로 식수난 및 고질적 민원해소

노후관 교체공사

사 업 개 요

위    치 : 명륜동, 서인동, 인지동 일원

사업기간 : 2013. 03. ~ 06

사업규모 : 송수관로 설치(D80~250)mm, L=2.2km

사업내용 : 송수관로 설치(D80~250)mm, L=2.2km

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	900		900	0
국 비	0
교부세	0
도 비	0
시 비	900		900
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 03월

- 공사착공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 03월

- 공사준공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 06월

사업비 산출내역 : 900백만원

- 공사비  -------------------------------------------------------------------------------------  860 백만원

- 설계용역비  ---------------------------------------------------------------------------------  38 백만원

- 시설부대비  -----------------------------------------------------------------------------------  2 백만원

기대효과

상수관로 노후화로 누수발생 및 하수관로 병행구간으로 사업성 필요

노후관 교체로 유수율 향상 및 양질의 수돗물 공급

농촌 지방상수도 개발사업

사 업 개 요

위    치 : 안성정수장, 당왕동 일원

사업기간 : 2013. 03. ~ 12

사업규모 : 송․배수관로 설치 L=2.2km

사업내용 : 송․배수관로 설치 L=2.2km

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	1,156		1,156
국 비	812		812
교부세	0
도 비	174		174
시 비	170		170
기타( )

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 03월

- 공사착공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 03월

- 공사준공  ----------------------------------------------------------------------------------- 2013년 12월

사업비 산출내역 : 1,156백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------  1,116 백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------   40 백만원

기대효과

광역상수도 미 보급지역에 양질의 수돗물 공급 필요

광역상수도 공급으로 생활환경 개선

안성시 하수도시설 민간투자사업(BTO)

사 업 개 요

위    치 : 안성시 일원(일죽, 죽산 제외)

사업기간 : 2008. 03. ～ 2013. 12

사업규모 : 하수처리장 3개소, 하수관거 334㎞, 배수설비 9,390가구

사업내용 :

- 안성증설(17,500/톤/일), 원곡(1,000톤/일), 신촌(160톤/일)

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	154,898	104,023	50,875	0
국 비	92,789	57,964	34,825
교부세	0
도 비	25,824.5	17,799.5	8,025
시 비	3,093	3,093
기타(민자,원인자)	33,191.5	25,166.5	8,025

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시계획 승인 ------------------------------------------------------------------------------ 2008년 3월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2008년 4월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 : 140,239백만원(154,898백만원 : 경상가)

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------  127,823,000천원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------ 2,181,000천원

- 감리비․시설부대비  ----------------------------------------------------------------  10,235,000천원

기대효과

안성천, 통복천, 한천 등 방류수역의 수질개선 및 보전에 기여

하수도시설 확충으로 인한 지역발전촉진 및 주거환경 개선

안성시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

사 업 개 요

위    치 : 안성시 일죽면, 죽산면(삼죽면 일부), 원곡면 일원

사업기간 : 2009. 01. ～ 2013. 11.

사업규모 : 하수관거 L=81.675㎞, 배수설비 3,052가구

사업내용 :

- 하수관거 L=81.675㎞, 배수설비 3,052가구

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	55,338	43,266	12,072	0
국 비	0	0	0	0
교부세	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0
기타(민자)	55,338	43,266	12,072	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시계획 승인 ------------------------------------------------------------------------------ 2010년12월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2011년 1월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년11월

사업비 산출내역 : 55,338백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------  49,727,000천원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------ 1,564,000천원

- 감리비․시설부대비  ------------------------------------------------------------------ 4,047,000천원

기대효과

청미천, 통복천 등 방류수역의 수질개선 및 보전에 기여

분류식 하수관거 보급에 따른 지역주민의 주거환경 개선

일죽 ․ 죽산 하수관거정비사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 일죽면, 죽산면(삼죽면 일부) 일원

사업기간 : 2010. 01. ～ 2013. 07.

사업규모 : 하수관거 L=16.4㎞, 배수설비 405가구

사업내용 :

- 하수관거 L=16.4㎞, 배수설비 405가구

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	10,539	6,732	3,807	0
국 비	7,062	4,397	2,665	0
교부세	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0
시 비	1,284	827	457	0
기타(민자)	2,193	1,508	685	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2010년11월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2011년 7월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 7월

사업비 산출내역 : 10,539백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------   9,357,944천원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------   385,936천원

- 감리비․시설부대비  ------------------------------------------------------------------   795,120천원

기대효과

청미천 등 방류수역의 수질개선 및 보전에 기여

분류식 하수관거 보급에 따른 지역주민의 주거환경 개선

불당공공하수처리시설 증설 사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 공도읍 불당리 295번지

사업기간 : 2012. 01. ～ 2014. 12.

사업규모 : 처리장 증설 6,000톤/일

사업내용 :

- 처리장 증설 6,000톤/일

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	18,122	440	17,682	0
국 비	5,646	220	5,426	0
교부세	0	0	0	0
도 비	2,823	110	2,713	0
시 비	2,823	110	2,713	0
기타(민자)	6,830	0	6,830	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2012년 8월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 9월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 18,122백만원

- 공사비  ---------------------------------------------------------------------------------   16,348,000천원

- 설계용역비  ------------------------------------------------------------------------------   440,000천원

- 감리비․시설부대비  ------------------------------------------------------------------ 1,334,000천원

기대효과

안성천 등 방류수역의 수질개선 및 보전에 기여

하수도시설 확충으로 인한 지역발전촉진 및 주거환경 개선

동지역 노후관거 개량사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 동지역 일원

사업기간 : 2013.01~10

사업규모 : 기존 노후관거(로) 정비

사업내용 :

- 노후관 개량 :  D=500～800mm, L=1,500m

- 하수도 준설 : 150ton

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	645	0	645	0
국 비	0
교부세	0
도 비	258		258
시 비	387		387
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년12월

사업비 산출내역 : 645 백만원

- 공사비  ----------------------------------------------------------------------------------------- 625백만원

- 설계용역비  -----------------------------------------------------------------------------------  20백만원

기대효과

부분파손 지역 및 배수불량지역의 하수관거 정비로 안전사고방지        및 민원해소

명륜연립~동인병원간 하수관개량사업

사 업 개 요

위    치 : 안성시 1,2,3동 일원

사업기간 : 2012.01~2014.12

사업규모 : 하수관 개량 L = 947m

사업내용 :

- PC암거 설치. B=1.5~3.0m, H=1.2m~1.8m

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	5,125	199	4,926	0
국 비	3,588	139	3,449
교부세	0
도 비	0
시 비	1,537	60	1,477
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 공사발주  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 3월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2014년12월

사업비 산출내역 : 5,125 백만원

- 공사비  --------------------------------------------------------------------------------------- 4,972백만원

- 설계용역비  ----------------------------------------------------------------------------------- 139백만원

- 시설부대비  -----------------------------------------------------------------------------------  14백만원

기대효과

하수관거 노후로 인한 위험요소(접합부 파손 및 내부 철근노출, 콘

크리트 파손 등)로 인한 안전사고 방지

진사리 공공도서관 조성

사 업 개 요

위    치 : 공도읍 진사리 쌍용차 연수원 1관

사업기간 : 2013. 01 ~ 2014. 01.

사업규모 : 1,488.5㎡(지하1층 /지상2층)

사업내용 :

- 부지와 건물을 주식회사 이마트로부터 기부채납 받아 도서관 건물로

리모델링하여 공공도서관을 조성

- 주요시설 : 종합자료실, 어린이자료실, 다목적실, 평생학습실, 동화구연체험관

(단 위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년 예 산	향후투자	비 고
계	3,000	0	3,000	0
국 비	1,600		1600
교부세	0
도 비	560		560
시 비	840		840
기타( )	0

세부 사업계획

추 진 일 정

- 실시설계  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 1월

- 공사착공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년 5월

- 공사준공  ------------------------------------------------------------------------------------ 2013년10월

사업비 산출내역 :   백만원

- 공사비  ------------------------------------------------------------------------------------- 2,580 백만원

- 설계용역비  --------------------------------------------------------------------------------- 120 백만원

- 도서구입 및 동화구연체험관 설치  -------------------------------------------------- 300 백만원

기대효과

공도 진사리 도서관 건립을 통해 시민들에게 균등한 정보 접근의 기회 제공